국토해양부, 건설기술연구원 석면해체․제거 표준품셈(노무비) 및 설계서작성 공정

[석면작업 기준]

편 저	한 기 채
010-8820-3377

2011년 하반기 적용

석면해체작업 표준 품셈(노무비)

- 제21장 해체철거공사 -

2011. 7

국  토  해  양  부

한국건설기술연구원

21-1 해체철거공사

6. 석면건축자재 해체

(㎡당)

구분	석면 해체 공	보통 인부
내장재	0.120	0.017
외장재	0.045	0.011
뿜칠재	0.5	-

[주]

① 본 품은 석면이 함유된 자재를 해체하는 품으로 적용기준은 다음과 같다.

• 내장재는 건축물의 내부 천장재, 내벽체, 간막이재 철거를 기준한 것이다.

• 외장재는 슬레이트 지붕재 해체를 기준한 것이다.

• 뿜칠재는 철골내화피복재를 기준으로 한 것으로 철골면의 하부면, 측면부,      상부면 등의 해체공사와 철재로 시공된 천장면에 부착되어있는 뿜칠재의        해체를 기준한 것이다.

② 뿜칠재의 경우, 콘크리트면에 부착된 석면 뿜칠재의 해체는 본 품의20%를      할증하여 적용할 수 있다.

③ 본 품은 비닐보양재(내장재, 뿜칠재), 오염제거구역 설치 및 해체가 포함된      것이며, 보양막(외장재)설치 및 해체품은 제외되어 있다.

④ 본 품은 일일 작업시간 6시간을 기준한 것이다.

⑤ 석면자재의 해체 작업 시 소요되는 기기경비 및 재료비, 소모품비 는            별도계상 한다.

⑥ 실내 고소작업 및 실외 비계설치를 위한 가설재의 설치는 별도 계상 한다.

[주해][註解]

① 관리감독자 지정은 법정 의무 사항으로 노무비는 별도 계상 하여야 한다.

표준 품셈 석면해체 공 기준 자재별 일일 작업량
구 분	수 량	단 가	금 액	산 식	일일 작업량
슬레이트	0.045인	95,386	4,292.3	95,386 / 4,292.3 =	22.22㎡
텍 스	0.12인	95,386	11,446.3	95,386 / 11,446.3 =	8.33㎡
뿜칠 재	0.5인	95,386	47,693	95,386 / 47,693 =	2㎡

② 노무비를 제외한 기타 품은 석면해체공 일일작업량 기준하여 별도계상 한다.

③ 기타 보험료, 이윤, 부가가치세 등별도 계상 한다.

④ 석면자재 해체 작업 관련규정(산업안전보건법, 산업안전보건기준에 관한규칙,     석면안전관리법, 폐기물관리법 등)에 따른 자재별 석면작업 공정은 다음과      같다.  <노동부, 환경부, 국토부 석면관련법령(요약) 참조>

⑤ 석면조사, 작업환경. 농도측정, 폐기물처리 비는 별도계상 한다

▣ 슬레이트 제거 작업 공정

1. 해체 노무비 <표준품셈 적용한다. 단, 관리감독자는 별도 계상 한다>

-. 석면해체 공/ 보통인부/ 관리감독자의 노무비

2. 습윤작업 <별도 계상 한다>

-. 보통인부의 노무비 / 분무기의 경비

3. 개인보호구 경비 및 불 침투 보호구 소모품 <별도 계상 한다>

-. 반면마스크, 장화, 고글의 경비 / 특급필터, 방진작업복, 방진장갑의 자재비

4. 위생설비설치 <별도 계상 한다>

-. 탕의실,샤워실,갱의실의 비닐재료비 / 냉.온수기,집수조,배수여과기의 경비

5. 소모품비 <별도 계상 한다>

-. 폐기용백, 스티커, 바닥보양비닐, 포장비닐, 밀봉테이프의 자재비

6. 추락방지 비계설치 <별도 계상 한다>

-. 수직. 수평비계, 내부안전방망 설치의 노무비 및 재료비

7. 현장청소 <별도 계상 한다>

-. 보통인부의 노무비

▣ 실내 텍스 및 뿜칠재 제거 작업 공정

1. 해체 노무비 <표준품셈 적용한다. 단, 관리감독자는 별도 계상 한다>

-. 석면해체 공/ 보통인부/ 관리감독자의 노무비

2. 장비 및 공구 경비

-. 음압기, 음압기록장치, 전동공구, 콤푸레샤, 에어타카, 발전기의 경비

3. 습윤작업 <별도 계상 한다>

-. 보통인부의 노무비 / 분무기의 경비

4. 개인보호구 경비 및 불 침투 보호구 소모품 <별도 계상 한다>

-. 반면마스크, 장화, 고글의 경비 / 특급필터, 방진작업복, 방진장갑의 자재비

5. 위생설비설치 <별도 계상 한다>

-. 탕의실,샤워실,갱의실의 비닐재료비 / 냉.온수기,집수조,배수여과기의 경비

6. 소모품비 <별도 계상 한다>

-. 폐기용백, 스티커, 바닥보양비닐, 포장비닐, 밀봉테이프의 자재비

7. 이동식강관 말 비계설치 <별도 계상 한다>

-. 설치.해체의 노무비 및 재료비

8. 현장청소 <별도 계상 한다>

-. 보통인부의 노무비

▣ 기타

1. 석면조사비 <별도 계상 한다>

-. 조사, 분석, 지도(도면)작성비의 노무비 및 재료비

2. 작업환경측정 및 석면농도측정비 <별도 계상 한다>

-. 측정, 분석, 측정결과서 작성비의 노무비 및 재료비

3. 폐기물처리비 <별도 계상 한다>

-. 수집운반 및 매립비용